4-2		사창리 민간임대주택 60호 유치

추진부서	민원봉사실	담 당	주택담당 안현준
협조부서		전화번호	440-2474
예산구분	비예산	실천목표	임기 내
추진상황	일부추진	추 진 율	10%

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년

◦ 사업위치 : 화천군 사내면 사창리 일원

◦ 사 업 량 : 민간임대주택 60호

◦ 사업내용 : 사내 주택공급을 위한 민간임대주택 건설사업자 유치

□ 추진실적

◦ 사내지역 주택공급 가능 사업부지 협의 :‘24. 3월

◦ 기본 및 실시설계 :‘24. 5월 ~‘25. 4월

◦ 인허가(주택건설사업 등) 신청 시 법률 및 기반시설 등 적극 검토하여 조기에 사업승인 및 착공 할 수 있도록 유도

□ 향후 추진계획

◦ 기본 및 실시설계 완료 :‘25. 4월한

◦ 주택건설사업계획 승인 :‘25. 6월한

◦ 주택건설사업 착공 :‘25. 6월한

◦ 주택건설사업 준공 :‘26. 12월한

◦ 입주자 모집 및 입주 :‘27. 1월한