3-4		공용실버주택 건립

추진부서	민원봉사실	담 당	주택담당 안현준
협조부서		전화번호	440-2474
예산구분	예산	실천목표	임기 내
추진상황	정상추진(LH 내부검토)	추 진 율	0%

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2028년

◦ 사 업 비 : 22,400백만원(국 9,300 군 13,100)

◦ 사업위치 : 사내면 사창리 356번지 일원

◦ 사 업 량 : 고령자복지주택 60호 (전용면적 33㎡ 이하), 사회복지시설 1,000㎡

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	22,400					4,480	5,600	12,320
국 비	9,300					1,860	2,325	5,115
군 비	13,100					2,620	3,275	7,205

□ 추진실적

◦ 공모사항 점검 및 공모접수 : ‘23. 6월

◦ 평가심사(국토부) 완료 : ‘23. 6월

◦ 공모선정 : ‘23. 8월

◦ 우선추진 후보지선정 기본자료 제공(군→LH) : ‘23. 9월

◦ 지방재정투자심사(중앙) 완료 : ‘24. 3월

◦ LH 경영투자심의 및 기본구상 용역 : 진행중

□ 향후 추진계획

◦ 기본협약 체결(화천군&LH) : ‘25. 2월

◦ 주택건설사업계획승인 : ‘25. 12월

◦ 실시계획협약 체결(화천군&LH) : ‘26. 2월

◦ 공사 추진 : ‘26. 3월 ~ ’28. 12월

□ 군민 소통실적

(단위 : 건)

주민간담회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론․방송보도	기타
2			3