4-4		귀농‧귀촌 청년 정착마을 조성(간동)

추진부서	기획감사실	담 당	재정전략담당
협조부서	-	전화번호	440-2025
예산구분	예산	실천목표	임기 내
추진상황	정상추진	추 진 율	25%

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

◦ 사업위치 : 간동면 간척리 594-1번지 일원

◦ 총사업비 : 15,200백만원(도 12,000, 군 3,200)    ※ 지방소멸대응기금

◦ 사업내용 : 전원 주택단지(대지) [100호 내외] 및 기반시설 조성

- 부지조성, 상하수도, 전기ㆍ통신, 도로 등 기반시설 조성

- 세대당 500㎡ 이내 분양

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	15,200		1,900	5,600	1,750	1,875	4,075
국 비
도 비	12,000		1,900	4,100	1,400	1,500	3,100
군 비	3,200			1,500	350	375	975
기 타

□ 추진실적

◦ 입지타당성 및 기본계획수립 용역 : 2022. 11월 ~ 2023. 3월

◦ 지구단위계획 수립 및 실시설계 용역 착수 : 2023. 6월

◦ 제반영향평가(환경·재해영향평가 등) 용역 착수 : 2023. 9월

□ 향후 추진계획

◦ 사업부지 내 지상물 철거 : 2024. 12월

◦ 진입도로(안) 설계 : 2023. 8월 ~ 2025. 2월

※ 편입 토지 매입 및 보상절차 추진 : ‘24. 11월 ~ ’25. 2월

◦ 진입도로 개설 공사 : 2025. 3월 ~ 2025. 12월

◦ 주거타운 조성 공사 : 2025. 5월 ~ 2026. 6월

◦ 택지분양 공고 및 계약 : 2025. 12월

□ 군민 소통실적

(단위 : 건)

주민간담회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론․방송보도	기타