5-1		화천군 제2농공단지 조성사업

추진부서	지역경제과	담 당	지역경제담당 김동주
협조부서	-	전화번호	440-2353
예산구분	예산	실천목표	임기 내
추진상황	정상추진	추 진 율	10%

□ 사업개요

◦ (사업기간) 2022년 ~ 2027년

◦ (사업위치) 사내면 사창리 489 및 삼일리 792번지 일원

◦ (사 업 비) 26,700백만원(기금 10,000 군 16,700)

◦ (사업내용) 제2농공단지 및 대체 비행장시설 조성

- 제2농공단지(70,181㎡) : 상·하수도, 전기ㆍ통신, 도로등 기반시설 조성

- 대체비행장시설(86,000㎡) : 활주로, 계류장, 신병교육훈련시설 등

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	26,700	3,000	1,000	1,000	1,700	8,000	12,000
국 비
도 비
군 비	16,700	3,000	1,000	1,000		4,700	7,000
기 타	10,000				1,700	3,300	5,000

□ 추진실적

◦ 기부 대 양여사업 합의각서 체결 : 2022. 2. 9.

◦ 농공단지 실시계획 수립 용역 발주 : 2022. 6. 7.

◦ 사유지 매입 완료 : 2023. 9. 11.

◦ 재해영향평가 용역 발주 : 2024. 2. 29

◦ 전략환경영향평가 용역 발주 : 2024. 3. 5

◦ 대체비행시설 설계(안) 최종회의 :  2024. 7. 3.

- 기존 협의(안) 및 표고315M유지 합의

□ 문제점 및 대책

◦ 기부 대 양여 사업비 합의각서 재산가액 범위내 사업 추진

◦ 군사시설 사업계획 승인 조건에 맞춰 사업비 세부 산출

※ 사업비 세부 산출 후 : 기부 대 양여 세목조서 조정(국방부↔화천군)

□ 향후 추진계획

◦ 기부 대 양여사업 사업비 균형조정 : 2025. 03월한

◦ 산업단지(농공) 지정 및 군사시설(대체 비행장) 사업계획 승인에

필요한 용역 추진

- 전략환경영향평가, 재해영향평가, 토양오염정밀조사, 지질조사(지반조사),

문화재지표조사 용역 : 2024. 1월 ~ 2025. 12월

◦ 산업단지(농공) 지정계획 승인 신청 : 2025. 6월

◦ 군사시설 사업계획 승인 신청 : 2025. 6월

□ 군민 소통실적

(단위 : 건)

주민간담회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론․방송보도	기타
		1	10