2-3		소비시장 선도 위한 종합 농산물유통센터 건립

추진부서	농업정책과	담 당	먹거리지원T/F 김상덕
협조부서	-	전화번호	440-4635
예산구분	예산	실천목표	임기 내
추진상황	정상추진	추 진 율	50%

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 계속

◦ 사 업 비 : 7,000백만원(국비 2,400, 도비 1,080, 군비 3,520)

◦ 사업내용 : 먹거리 통합 조달·공급 시설 구축

- 먹거리통합지원센터 : 선별·소분·포장실, 전처리실. 저온저장실 등

- 기타 시설 및 물류장비 : 위생시설, 전처리·안전성 검사 장비 등

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	7,000		750	5,250	1,000
국 비	2,400		300	2,100
도 비	1,080		135	945
군 비	3,520		315	2,205	1,000
기 타

□ 추진실적

◦ 먹거리통합지원센터 건립 지원 선정 : 2022. 6. 30.

◦ 건축 기본 및 실시설계 완료(2023.8월) ⇨ 강원도 계약심사 완료(2023.9월)

⇨ 입찰 공고 및 시공사 선정(2023.10월) ⇨ 계약체결 및 착수(2023.12월)

□ 향후 추진계획

◦ 먹거리통합지원센터 운영 준비 : 2024. 1 ~ 9월

- 운영계획 수립, 조례 제정 등

◦ 먹거리통합지원센터 시범 운영 : 2024. 9 ~ 12월

- 화천농협 연계 군 급식 시범 공급, 농가 교육 및 조직화 등

※ 군 부대 업무협의(연중)

- 농산물 유통망 확대 추진(대형유통업체, 학교급식, 공공기관 등)

□ 군민 소통실적

(단위 : 건)

주민간담회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론․방송보도	기타
3