3-4		공용실버주택 건립

추진부서	민원봉사실	담 당	주택담당 안현준
협조부서	-	전화번호	440-2474
예산구분	예산	실천목표	임기 내
추진상황	정상추진	추 진 율	0%

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2028년

◦ 사 업 비 : 22,800백만원(국 9,300 / 군 13,500)

◦ 사업위치 : 사내면 사창리 356번지 일원

◦ 사 업 량 : 고령자복지주택 60호 (전용면적 33㎡ 이하), 사회복지시설 1,000㎡

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	22,800	400				4,500	5,600	12,300
국 비	9,300					1,900	2,300	5,100
도 비
군 비	13,500	400				2,600	3,300	7,200
기 타

□ 추진실적

◦ 공모사항 점검 및 공모접수 : 2023. 6월

◦ 평가심사(국토부) 완료 : 2023. 6월

◦ 공모선정 : 2023. 7월

◦ 우선추진 후보지선정 기본자료 제공(군→LH) : 2023. 9월

◦ 지방재정투자심사(중앙) 완료 : 2024. 3월

□ 향후 추진계획

◦ 기본 협약체결(화천군&LH) : 2024. 12월

◦ 주택건설사업계획승인 : 2025. 12월

◦ 실시계획 협약체결(화천군&LH) : 2026. 1월

◦ 공사 추진 : 2026. 3월 ~ ’28. 12월

□ 군민 소통실적

(단위 : 건)

주민간담회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론ㆍ방송보도	기타
			1