4-1-②		공공주택사업(행복주택)

추진부서	지역경제과	담 당	도시재생담당 이윤희
협조부서	-	전화번호	440-2360
예산구분	예산	실천목표	임기 내
추진상황	정상추진	추 진 율	10%

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

◦ 사업위치 : 화천읍 하리 59-6번지(현 화천읍사무소) / 1필지, 2,219㎡

◦ 사업내용 : LH공공임대주택(통합공공임대) 공급 [총 72세대]

- 총 12개층(F4~F15) 72세대 / 연면적 6,091㎡(전용41㎡ 24호, 전용46㎡ 48호)

◦ 사업추진 방식 : LH한국토지주택공사 위․수탁 협약 체결

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	22,457			53	3,000	11,500	7,904
국 비
도 비
군 비	6,000				3,000	1,500	1,500
기 타	16,457			53		10,000	6,404

□ 추진실적

◦ 화천군 및 LH 기관 협의 : 2021. 3. 6.

◦ 도시재생 총괄사업관리자 업무협약 : 2021. 9월

◦ 도시재생사업 선정(국토부) 및 활성화 계획 승인 : 2022. 3. 23.

◦ LH 내부절차(경영투자심의 등) 이행 및 용역사 선정 : 2023. 1월

◦ 행정복지센터 소요 공간 및 주차장 배치계획 수립 : 2023. 4월

◦ 사업물량 변경 및 기본설계 용역 : 2024. 2월

□ 향후 추진계획

◦ 인허가절차 이행 등 사업계획 수립 : 2024. 6월

◦ 세부 위 ․ 수탁협약 체결(화천군-LH) : 2024. 9월

◦ 시공사 선정 및 공사추진 : 2024. 6월 ~ 2026. 6월

◦ 공공임대주택(행복주택) 공급(72세대) : 2026. 7월

□ 군민 소통실적

(단위 : 건)

주민간담회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론․방송보도	기타
			3