4-5		전원마을(체류형 임대주택) 조성

추진부서	민원봉사실	담 당	건축담당 이범하
협조부서	-	전화번호	440-2471
예산구분	예산	실천목표	임기 내
추진상황	정상추진	추 진 율	20%

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년

◦ 사업위치 : 하남면 거례리 578번지 (구) 거례분교

◦ 사 업 비 : 3,200백만원(기금 3,000 / 군비 200)

◦ 사업규모 : 대지면적 4,900㎡(1,482평)

- 개발면적 : 4,900㎡(1,482평)

- 필지당 면적 : 10필지 [80평(2필지), 90평(3필지), 100평(5필지)]

◦ 사업내용

- 단독주택 10동(25평 내외) 신축  ※ 3가지 유형 주택 신축

- 기반시설 : 도로, 상ㆍ하수도, 주차장, 텃밭 정원 등

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	3,200			200	1,000	2,000
국 비
도 비
군 비	200			200
기 타	3,000				1,000	2,000

□ 추진실적

◦ 현황측량 및 기본계획 : 2023. 11월

◦ 기반조성 토목 실시설계용역 : 2024. 6월

◦ 기반조성 전기,통신 실시설계용역 : 2024. 6월

◦ (구)거례분교 해체공사 실시설계용역 : 2024. 6월

◦ 건축 실시설계용역 진행 중 : 2024. 5. 27. ~ 2024. 9. 23.

□ 향후 추진계획

◦ (구)거례분교 해체공사 : 2024. 7월 ~ 8월

◦ 기반시설 조성공사 : 2024. 7월 ~ 10월

◦ 단독주택 신축공사 : 2024. 10월 ~ 2025. 8월

◦ 입주 : 2025. 9월

□ 군민 소통실적

(단위 : 건)

주민간담회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론ㆍ방송보도	기타