4-8		화천 水 힐링센터 건립사업

추진부서	주민복지과	담 당	주민복지담당 박청영
협조부서	-	전화번호	440-2348
예산구분	예산	실천목표	임기 내
추진상황	정상추진	추 진 율	3%

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년

◦ 사업위치 : 화천읍 하리 42-19번지

◦ 사 업 비 : 2,800백만원(국 2,240 / 군 560)

◦ 시설규모 : 수중운동 및 목욕시설, 바데풀 등

◦ 이용대상 : 관내 65세 이상 노인

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계회
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	2,800			58	67	2,675
국 비	2,240			46	54	2,140
도 비
군 비	560			12	13	535
기 타

□ 추진실적

◦ 특수상황 지역개발사업 신청(행안부) : 2022. 4월

◦ 특수상황 지역개발사업 현장확인(행안부) : 2022. 6월

※ 신축부지: 화천읍 중리 262-3번지

◦ 사업선정 완료 통보(행안부) : 2022. 8월

◦ 사업부지 변경 요청(행안부) : 2023. 2월

※ 당초 : 화천읍 중리 262-3번지, 변경 : 화천읍 하리 43-4번지

◦ 사업부지 변경계획 수립 : 2024. 2월

※ 당초 : 화천읍 하리 43-4번지, 변경 : 화천읍 하리 42-19번지

※ 부지매입 비용 과다 소요 예상으로 변경

◦ 사업부지 변경협의(행안부) : 2024. 3월

※ 도 담당자 건립부지 현장확인(3.18)

◦ 지반조사 및 경계측량 : 2024. 3월

◦ 건립추진 계획 수립 : 2024. 3월

◦ 공유재산 심의 완료 : 2024. 4월

◦ 공공건축 심의 및 기획설계용역 완료 : 2024. 6. 26.

□ 문제점 및 대책

◦ 당초 힐링센터 목욕시설 건립을 추진을 목표로 하였으나, 주변 여건 및 부지활용도를 높이기 위해 힐링센터를 포함 5층 규모의 공무원 숙소 추가 신축 검토

□ 향후 추진계획

◦ 설계(기본 및 실시)용역, BF인증용역, 재해예방기술지도 : 2024. 7 ~ 10월

◦ 일상·계약심사 및 행정절차 이행 :‘24. 10월

◦ 공사 착공 및 준공 : 2024. 11월 ~ 2025. 11월

□ 군민 소통실적

(단위 : 건)

주민간담회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론ㆍ방송보도	기타