4-9		전천후 다목적 레저스포츠 공간 조성(화천 생활실내체육관)

추진부서	문화체육과	담 당	체육시설조성담당 이윤기
협조부서	-	전화번호	440-2252
예산구분	예산	실천목표	임기 내
추진상황	정상추진	추 진 율	40%

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2021. 4월 ~ 2024. 12월

◦ 사업위치 : 화천읍 아리 87-13번지 일원

◦ 사업내용 : 실내체육관 건립 1식(건축 연면적 3,685㎡)
- 실내 테니스장 3면, 풋살(족구) 겸용구장 1면 조성

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계회
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	10,240	7,940	2,300
국 비	5,940	5,940
도 비
군 비	4,300	2,000	2,300
기 타

□ 추진실적

◦ 공사 착공 : 2023. 8월

◦ 게비온 옹벽 시공 : 2023. 12월

◦ 기초 콘크리트 타설 : 2024. 6월

□ 향후 추진계획

◦ 철골 및 철근콘크리트 공사 : 2024. 7월 ~ 8월

◦ 지붕 및 벽체 판넬공사 : 2024. 8월 ~ 9월

◦ 타일 및 창호공사 : 2024. 10월

◦ 공사 준공 : 2024. 12월

□ 군민 소통실적

(단위 : 건)

주민간담회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론ㆍ방송보도	기타